załącznik nr 11 do SIWZ

Wzór

Umowa Nr ……………./2014

Zawarta w dniu ………………… r. w Stoszowicach pomiędzy:

Gminą Stoszowice z siedzibą Stoszowice 97; 57-213 Stoszowice, NIP: 887-16-35-220, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:
1. Marka Janikowskiego – Wójta Gminy 
przy kontrasygnacie:
2. Katarzyny Cichoń – Skarbnika Gminy

a ………………………………………………………………………………………………

z siedzibą …………………………………………………………NIP:…………………….
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

1.…………………………………………..

2.…………………………………………..

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym Nr RR. 271.2.2014. 
Postanowienia umowy:
§ 1
1. Przedmiot umowy.
1.1 Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie, pn.: „Srebrna Góra, Wiadukt Żdanowski (XX w.): wykonanie niezbędnych prac zabezpieczających w ramach remontu i rewaloryzacji – kontynuacja prac”.
1.2 Zadanie to jest przedmiotem wniosku o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Dziedzictwo kulturowe, Priorytet 1 Ochrona zabytków.
1.3 Orientacyjny zakres robót budowlanych obejmuje m.in.: 
1)	Roboty przygotowawcze – montaż rusztowań  na stoku (przyczółku wiaduktu) o wysokości zmiennej od 5,0m do 21,0m,  szerokości 2 x 4,0m + 3,5m  i długości  28,8m (835 m2)
2)	Wytrasowanie położenia otworów. (139 szt.)
3)	Wiercenie otworów  o długości 3,36 m (na przestrzał) w łuku Nr 3 pod ściągi sprężające (20 szt.)
4)	Wiercenie otworów o długości  (głębokości)  3,25m  -  naprzemiennie z obu stron, w łuku Nr 3 (79 szt.)
5)	Wiercenie otworów o długości  (głębokości)  3,16m  -  naprzemiennie z obu stron, w ścianach i łukach sklepień  „otworów odciążających” (40 szt.)
6)	Wykucie gniazd o głębokości 2/3 cegły dla osadzenia blach oporowych śrub napinających: ściągów  i  kotew wklejanych   (159 szt.)
7)	Zamurowanie gniazd z osadzonymi głowicami ściągów i kotew wklejanych  (159 szt.)
8)	Wykucie pasm sklepienia (podniebienia łuku) oraz części ścian w pachwinach łuku nr 3 i otworów odciążających  o głębokości ½ cegły w obrębie znacznych spękań i szczelin  (185,0 m2)
9)	Uzupełnienie – licowanie ubytków sklepienia (podniebienia łuku) oraz części ścian w pachwinach łuku nr 3 i otworów odciążających (185,0 m2).
Warunki techniczne przedmiotu zamówienia w zakresie wymiarów obejmujące ww. pkt (od 1 do 9) należy traktować jako minimalne, natomiast właściwe parametry dostosowane zostaną do warunków zastanych w terenie.
2. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące składniki:
1)  oferta Wykonawcy,	
2)  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
3)	przedmiar robót; 
4)	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót „Remont i rewaloryzacja Wiaduktu Żdanowskiego”. STWiOR należy czytać tylko w zakresie w odniesieniu do wyodrębnionych prac określonych w przedmiarze 
5)	Dokumentacja techniczna remontu i rewaloryzacji Wiaduktu Żdanowskiego

2.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załączony do niniejszej umowy przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, dokumentacja techniczna.  Roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą Umową warunkach.

2.2. Wykonawca oświadcza, że dokumenty, o których mowa w ust. 2.1. są kompletne, wzajemnie spójne i w pełni wystarczające do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy. 

2.3 W przypadku wątpliwości interpretacyjnych dotyczących zakresu i rodzaju robót określonych w Umowie oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca kolejność ważności niżej wskazanych dokumentów:
1) dokumentacja projektowa, 
2) umowa,
3) oferta Wykonawcy, 
4) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Przepisy prawne i dokumenty Umowy.
3.1. Prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy regulują: obowiązujące w Polsce przepisy, a przede wszystkim:
•	Kodeks cywilny,
•	ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473),  
•	ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.).

3.2. Podstawowym dokumentem jest Umowa podpisana przez Zamawiającego i Wykonawcę.

3.3. Gdziekolwiek w treści Umowy i dokumentach umownych jest mowa o powiadomieniu, zezwoleniu, zatwierdzeniu, świadectwie lub postanowieniu wydanym przez kogokolwiek, rozumie się to, że odpowiedni dokument powinien być sporządzony na piśmie. Dokumenty takie są wiążące dla stron po potwierdzeniu przez upoważnione osoby.

4. Prawa i obowiązki stron, rola Inspektora nadzoru inwestorskiego w procesie realizacji zadania.
Zamawiający zapewni Nadzór inwestorski w trakcie realizacji robót budowlanych.
4.1. Inspektor nadzoru powinien wypełniać obowiązki i działać w ramach kompetencji 
wyszczególnionych w Umowie, przepisach prawa budowlanego i aktach wykonawczych.

4.2. W przypadku, gdy niezbędne jest podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres uprawnień inspektora nadzoru, wiążące jest ustalenie Zamawiającego, z wyjątkiem wypadków wyraźnie stwierdzonych w Umowie. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z dokumentów Umowy.

4.3. Zmiana Inspektora nadzoru wymaga formy pisemnej i staje się obowiązująca po doręczeniu  kopii Wykonawcy.

5. Kierownictwo robót i pracownicy Wykonawcy.
5.1. Wykonawca zatrudni niezbędne kierownictwo robót posiadające uprawnienia do prowadzenia robót na obiekcie zabytkowym, na czas ich wykonywania.

5.2. Kierownik budowy jako upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy będzie otrzymywał od Inspektora nadzoru kierowane do Wykonawcy polecenia.

5.3. Wykonawca zatrudni na placu budowy w związku z wykonaniem robót takich pracowników technicznych i robotników, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe,  przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dbają o dobre wykonywanie swoich prac.

5.4. Potwierdzenie przez inspektora nadzoru lub Zamawiającego  braku obecności kierownika budowy na placu budowy może skutkować rozwiązaniem Umowy z Wykonawcą. 

5.5. Inspektor nadzoru ma obowiązek zgłaszać Wykonawcy uwagi w stosunku do osób, które jego zdaniem są niekompetentne lub niedbałe w wykonywaniu swojej pracy lub których obecność na terenie placu budowy jest uznana przez niego za niepożądaną.

5.6. Kierownik budowy zobowiązany jest do wpisywania do dziennika budowy terminu wykonania prac zanikający lub ulegających zakryciu z wyprzedzeniem umożliwiającym Inspektorowi nadzoru ich sprawdzanie i odbiór; przystąpienie do sprawdzania i odbioru tych prac winno nastąpić nie później niż w ciągu 6 dni roboczych od dnia dokonania wpisu do dziennika budowy.

6. Przekazanie placu budowy.
6.1. W  dniu podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony, wykonany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz. U. Nr 120, poz. 1126.

6.2. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie do 10 dni po podpisaniu Umowy.

6.3. Zamawiający zapewni nadzór inwestorski w trakcie realizacji robót budowlanych.

6.4. W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien utrzymywać plac budowy w stanie wolnym od przeszkód, składować materiały i sprzęt w ustalonych miejscach i w należytym porządku, a zbędne przedmioty usunąć z placu budowy.

7.5. Po zakończeniu robót Wykonawca powinien uporządkować teren placu budowy                           i przekazać go Zamawiającemu. Termin uporządkowania placu budowy ustala się na 7 dni po zakończeniu robót.

7. Obowiązki i zadania Wykonawcy.
7.1. Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty budowlane z należytą starannością i zgodnie z postanowieniami dokumentów Umowy. Wykonawca zapewni kompetentne kierownictwo, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie przedmioty niezbędne do wykonania oraz usunięcia ewentualnych wad. Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez izbę, z określonym w nim terminem ważności.

7.2 Wykonać przedmiot Umowy zgodnie z Umową, Prawem Budowlanym, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, projektem budowlanym, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, złożoną ofertą oraz należyta starannością w odniesieniu do ich wykonania, bezpieczeństwa, dobrej jakości i właściwej organizacji.

7.3. Wykonawca zagospodaruje i zabezpieczy plac budowy na swój koszt.

7.4. Wykonawca musi zapewnić Inspektorowi nadzoru pełną dostępność do robót. Wykonawca jest  zobowiązany zgłaszać do odbioru wpisem do dziennika budowy prace zanikające lub ulegające zakryciu z wyprzedzeniem 7 dni. Jeżeli wykonawca nie poinformował o tych faktach  Inspektora nadzoru zobowiązany jest odkryć  roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.

7.5. Wykonawca w szczególności wykona na terenie budowy prace przygotowawcze, zapewni wodę i energię na cele budowlane własne i zobowiązuje się ponieść koszty z tym związane (przez cały okres wykonywania prac). 

7.6. Wykonawca oznaczy teren budowy oraz inne miejsca udostępnione przez Zamawiającego na terenie których mają być wykonane prace, które mogą stanowić część terenu budowy.

7.7. Wykonawca zagospodaruje i zabezpieczy teren budowy na własny koszt i jednocześnie zapewni pełną ochronę osób i mienia, a w szczególności opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

7.8. Wykonawca musi przestrzegać przepisów Prawa Budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, przepisów z zakresu ochrony środowiska, jest zobowiązany umożliwić wstęp na teren budowy Zamawiającemu, Inwestorowi zastępczemu, Inspektorowi nadzoru, pracownikom organów państwowych celem dokonania kontroli i udzielać wszelkich informacji i pomocy związanej z wykonywanym zadaniem i wymaganej przepisami prawa.

7.9. Wykonawca podejmie wszelkie działania niezbędne w celu ochrony środowiska na terenie budowy oraz będzie unikać szkód lub nadmiernej uciążliwości prowadzonej budowy dla osób trzecich i dóbr Publicznych lub innych negatywnych skutków wynikających z realizacji inwestycji.

7.10. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać w formie zgodnej  z art. 3  pkt. 13 i  art. 46 Prawo Budowlane – dziennik budowy.

7.11. Wykonawca winien chronić przed uszkodzeniem, kradzieżą i dewastacją (uszkodzeniem) wykonane przez siebie roboty aż do momentu odbioru końcowego robót.

7.12. Wykonawca wywiezie gruz budowlany i zbędną ziemię na wysypisko wg własnego uznania i poniesie związane z tym koszty.

7.13. Jeżeli całość robót zostanie ukończona, Wykonawca powiadamia o tym Inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy oraz przesyła zawiadomienie Zamawiającemu. Takie zawiadomienie będzie uważane za wniosek Wykonawcy o dokonanie odbioru wykonanych robót.

7.14. Wykonawca ponosi odpowiedzialność finansową i prawną za wszystkie szkody powstałe  z Jego winy w czasie realizacji Umowy i w okresie rękojmi i gwarancji na rzecz Zamawiającego i osób trzecich.	

7.15. Wykonawca powinien uprzedzić pisemnie Zamawiającego o każdej okoliczności mogącej powodować opóźnienie robót w chwili wystąpienia takiej okoliczności. Zawiadomienie powinno zostać przesłane Zamawiającemu w ciągu 7 dni od zaistnienia okoliczności powodującej konieczność jego sporządzenia.

7.16. W terminie 5 dni od daty podpisania niniejszej Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu opłacona polisę OC, potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w związku z realizacją niniejszej Umowy	 oraz ubezpieczony od zniszczenia wszelkiej własności (np. plac budowy oraz mienie osób trzecich), spowodowanych działaniem siły wyższej lub działaniem osób trzecich ( np. akty wandalizmu, kradzież), a także jest ubezpieczony w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzenia działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich, od zniszczenia wszelkiej własności, spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy. Z polisy ubezpieczeniowej musi wynikać, że Wykonawca jest ubezpieczony na kwotę minimum 300 000,00  zł. Ubezpieczenie musi obowiązywać co najmniej na okres realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego oraz okres do czasu zakończenia czynności odbioru końcowego tj.: minimum od dnia podpisania Umowy do dnia 15.10.2014 r. Jeżeli termin zakończenia realizacji robót ulegnie zmianie, Wykonawca będzie zobowiązany przedłużyć okres obowiązywania ww. ubezpieczenia na okres niezbędny do czasu zakończenia czynności odbioru końcowego. Zamawiający wymaga, aby w treści polisy ubezpieczeniowej znajdował się zapis, że ubezpieczenie dotyczy konkretnej Umowy, tj. Umowy na „Srebrna Góra, Wiadukt Żdanowski (XX w.): wykonanie niezbędnych prac zabezpieczających w ramach remontu i rewaloryzacji – kontynuacja prac”.

8. Podwykonawstwo 
8.1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii takiej umowy oraz kopii jej ewentualnej zmiany.

8.2. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy; Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

8.3. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt 8.2.

8.4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w pkt 8.3., uważa się za akceptacje projektu umowy przez Zamawiającego.

8.5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienie na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

8.6. Zamawiający, w terminie określonym w pkt 8.3. zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w pkt 8.3.

8.7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem SA roboty budowlane, w terminie określonym w pkt  8.3. uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

8.8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0.5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.

8.9. W przypadku o którym mowa w pkt 8.8., jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż termon określony w pkt 8.2, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

8.10. Zapisy punktów: od 8.1. do 8.9. stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

8.11. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

8.12. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 8.11 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

8.13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

8.14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwia wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w pkt 8.11. Zamawiający informuje, że termin zgłaszania uwag wynosi 7 dni od dnia doręczenia informacji.

8.15. W  przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 8.14., w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

8.16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w pkt 8.11., Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzeniem należnego Wykonawcy.

8.17. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w pkt 8.11., lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego lub do naliczenia kary umownej.

8.18. Przepisy art. 143a-143d P.z.p. nie naruszają praw i obowiązków zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny.

8.19. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawcy powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

8.20. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymaganego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Dowodami niniejszymi są;
1) oświadczenie Wykonawcy o dokonaniu zapłaty wymaganego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, zawierającego pisemne oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o dokonaniu powyższej zapłaty.
2) potwierdzenie przelewu bankowego wraz z pisemnym oświadczeniem Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu należnej części wynagrodzenia. 
Powyższe dowody zapłaty Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu nie później niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego żądania przedłożenia powyższych dowodów.

8.21. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego zakresu odpowiedzialności za wady przez klauzulę dotyczącą gwarancji jakości oraz rękojmi, aby nie były one krótsze od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi, a także zobowiąże Podwykonawców (dalszych Podwykonawców) do ponoszenia wobec Zamawiającego solidarnej odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy, które mogą ujawnić się w okresie gwarancji jakości oraz w okresie rękojmi. Ponadto zapewni uprawnienie do żądania w każdym czasie przez Zamawiającego od Podwykonawców (i dalszych Podwykonawców) oświadczeń, o których mowa w pkt 8.20.

8.22. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.

8.23. Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zobowiązani są solidarnie do usuwania wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości oraz w okresie rękojmi.

§ 2.
9. Terminy i warunki realizacji umowy.
9.1. Termin wykonania zamówienia.
Roboty budowlane należy wykonać w terminie: do dnia 15. 10. 2014 r.
Zmiany treści niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności zgody obu stron, z zachowaniem formy pisemnej i są dopuszczalne wyłącznie w trybie art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473)

9.2. Termin usunięcia usterek i wad nie może być dłuższy niż 21 dni roboczych od daty protokolarnego stwierdzenia usterki w obecności Wykonawcy.

§ 3.

10. Warunki istotnych zmian postanowień umowy.
W razie zaistnienia istotnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy można dokonać zmiany Umowy.

10.1. Warunki zmiany terminu wykonania zamówienia:
a) z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, polegających 
na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa,

b) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,

c) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością,  w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

d) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy.

10.1.1. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca winien jest poinformować Zamawiającego pisemnie i natychmiast odnotować to w dzienniku budowy.

10.1.2. Strony z powodów, jakie mogą wpływać na zmiany terminów wykonania prac, wyłączają niedogodności związane z pogodą, typową dla okresu wykonywania prac                    w miejscu budowy.

10.2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający w tym przypadku może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia w formie pieniężnej należnego mu z tytułu wykonania części umowy od momentu odstąpienia od umowy. 

10.3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w zawartej Umowie w części dotyczącej zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego. 

10.4. W przypadku zmiany kluczowego specjalisty przedstawionego w ofercie, nowy specjalista musi spełniać wymagania określone w SIWZ dla danego specjalisty.

10.5. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany kluczowego specjalisty, jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z Umowy.

10.6. Zgodnie z żądaniem Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest zmienić kluczowego specjalistę w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

10.7 W wypadku konieczności zlecenia zamówień dodatkowych 

10.7.1 W przypadku konieczności zlecenia zamówień dodatkowych rozliczenie nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych sporządzonych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru  i Zamawiającego.

10.7.2. Rozpoczęcie wykonania zamówień dodatkowych, o których mowa w ust. 9.3 może nastąpić wyłącznie w trybie odrębnej umowy, zawartej na podstawie protokołu konieczności sporządzonego przez Wykonawcę i potwierdzonego przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego. 

10.7.3 Wycena zamówień dodatkowych zostanie dokonana przez Wykonawcę w oparciu o identyczne wartości (stawki, narzuty, marże, wartości materiałów, itp.) jak w przypadku  zamówienia podstawowego.

11. Kary umowne.
11.1. Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za opóźnienie w oddaniu przedmiotu Umowy - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto należnego Wykonawcy za przedmiot Umowy za każdy dzień opóźnienia,
2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto za wykonany przedmiot odbioru, za każdy dzień  opóźnienia liczonej od dnia ustalonego na usunięcie wad,
3) za odstąpienie od Umowy z winy Wykonawcy - w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto za przedmiot Umowy.
4) braku lub nieterminowości zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcą – w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy
5) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, a także poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy lub jej zmiany – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto należnego Wykonawcy za przedmiot umowy za każdy dzień opóźnienia i za każdy przypadek
6) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości: 500,00 zł. brutto za każdy dzień opóźnienia w zakresie obowiązku dostosowania umowy do treści niniejszej umowy, która przewiduje maksymalnie 30 dniowy termin zapłaty tego rodzaju należności.

11.2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:
1) za opóźnienie w przeprowadzeniu odbioru - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie, w którym odbiór  powinien być zakończony,
      
2) za odstąpienie od Umowy z winy Zamawiającego - w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto  za przedmiot Umowy.

11.3. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek wymienionego w Umowie tytułu nie pokrywa poniesionej szkody, strona, która poniosła szkodę, może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, dokumentując swoje roszczenie wyliczeniem - rzeczywiście  poniesionych szkód oraz ścisłym związkiem z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem danego zobowiązania Umowy przez stronę drugą.

11.4. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszała postanowienia Umowy, w terminie 30 dni od daty wystąpienia przez stronę drugą z żądaniem zapłaty. Zamawiający w razie opóźnienia w zapłacie kary może potrącić należną mu karę z należności Wykonawcy lub dochodzić na drodze sądowej. Wykonawca w przypadku opóźnienia Zamawiającego może dochodzić zapłaty na drodze sądowej.

11.5. W wypadku odstąpienia przez jedną ze stron od Umowy, wartość wykonanych przez Wykonawcę prac zostanie rozliczona według cen z daty zawarcia niniejszej Umowy. 

12. Gwarancja i rękojmia.
12.1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane przez siebie, w ramach udzielonego zamówienia, roboty – pisemnej gwarancji na okres 5 (pięć) lat licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia bez usterek i wad.

12.2. Wykonawca obejmie gwarancją i rękojmią całość przedmiotu Umowy. Przez całość przedmiotu Umowy rozumie się wszelkie wykonane roboty budowlane związane z wykonaniem zamówienia.

12.3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie ustalonym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony do ich usunięcia we własnym zakresie, lub może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej (innemu Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy i bez utraty uprawnień z tytułu gwarancji. 
O zamiarze powierzenia usunięcia wad osobie trzeciej Zamawiający powinien zawiadomić Wykonawcę co najmniej na 7 dni wcześniej. Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią zostanie w takim przypadku potrącony z wynagrodzenia lub kaucji gwarancyjnej lub będzie dochodzony od Wykonawcy w odrębnym trybie sądowym bądź pozasądowym.

§ 4.
13. Wynagrodzenie.
13.1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofertą Wykonawcy wybraną w trybie przetargu nieograniczonego jest wynagrodzenie ryczałtowe, płatne jednorazową fakturą końcową. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 pkt 13.2 nie będzie podlegało waloryzacji w okresie obowiązywania Umowy, nie może być  zmienione z powodu zmian popytu i podaży na rynku pracy, zmian cen materiałów budowlanych oraz zmian kursów walut obcych, czy podatku od towarów i usług lub innych obciążeń publicznych. W każdym przypadku wiążąca jest cena brutto, o której mowa w § 4 pkt 13.2. niniejszej Umowy.  

13.2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w pkt. 13.1. wyraża się kwotą: 

1)	netto ………………………….. zł (słownie złotych: ………………………….)
1a) VAT ………… % ………………….. zł (słownie złotych ……………………)
2)	brutto …………………………. Zł (słownie złotych: …………………………)

Płatnikiem faktury jest Gmina Stoszowice, z siedzibą Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice; NIP 887-16-35-220.

13.3. Zmiana stawki VAT w trakcie obowiązywania Umowy nie skutkuje zmianą ceny oferty tj. kwoty brutto Umowy.

13.4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury za przedmiot Umowy w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury pod warunkiem odbioru robót bez usterek i wad oraz po odbiorze, o którym mowa w ust. 15.7. 

§ 5.

14. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy.
14.1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 5 % wartości robót brutto zgodnie z przedłożoną ofertą, tj. ………………….. zł. (słownie zł.: ………………………       
   ………………………………………………………………………………………………)       i zostanie wniesione najpóźniej w dniu podpisania Umowy.

Zabezpieczenie  może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku   
następujących formach (art. 148 pkt. 1 Prawo zamówień publicznych):
      1)   pieniądzu;
2)	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3)	gwarancjach bankowych;
4)	gwarancjach ubezpieczeniowych;
5)	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

14.1.1. Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:
•	w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej;
•		przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
•		przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

14.1.2. W przypadku wpłaty pieniężnej zabezpieczenie należy wpłacać na depozytowe konto:
Bank Spółdzielczy Ząbkowice Śląskie Oddział Budzów; Nr rachunku: 25 9533 1014 2003 0000 0185 0002.

Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

          14.2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostało wniesione  w ………..
 …………………………………………………………………………………………………

14.3. 70 % zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości ………………………… zł. (słownie: …………….………………………………………. zł.)

Zamawiający zwróci Wykonawcy w ciągu 30 dni po przekazaniu do eksploatacji przedmiotu Umowy bez usterek i wad.

14.4.  30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości ………………………. zł. słownie zł.: ………………………………………………………………………………).
Zamawiający zwróci Wykonawcy w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi dla  przedmiotu Umowy bez usterek i wad.

§ 6.

15. Odbiór robót budowlanych.
15.1. Przed rozpoczęciem odbioru końcowego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą. 

15.2. Podstawę do rozpisania odbioru stanowi całkowite zakończenie wszystkich prac konserwatorskich i robót budowlanych składających się na przedmiot Umowy, wykonanych bez usterek i wad oraz wpis inspektora nadzoru w dzienniku budowy, że w/w prace nadają się do odbioru.  

15.3. Zamawiający rozpocznie czynności odbiorowe w ciągu 10 dni od daty stwierdzenia przez inspektora nadzoru, że przedmiot Umowy jest gotowy do odbioru i zakończy je w ciągu 14 dni licząc od dnia rozpoczęcia czynności odbiorowych.

15.4. Zamawiający zawiadomi strony i innych uczestników odbioru końcowego, w tym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,  o wyznaczonym terminie odbioru.

15.5. Przed rozpisanie odbioru końcowego pełną dokumentację powykonawczej w 2 (dwóch) egzemplarzach, w tym: operatu kolaudacyjnego w 2 egzemplarzach, zawierającego m. in. Sprawozdanie techniczne, receptury i ustalenia technologiczne, wyniki badań kontrolnych oraz receptury i ustalenia technologiczne, wyniki badan kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe i aprobaty techniczne, dziennik budowy, rozliczenie końcowe, oświadczenia, inne dokumenty wynikające z ustawy Prawo budowlane – art. 57 oraz 3 egz. Kosztorysu powykonawczego.

15.6. Odbiór ostateczny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Wykonawcy, po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji na roboty wykonane w ramach udzielonego zamówienia. Odbiór ostateczny zwalnia Wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy, dotyczących usuwania wad.

§ 8.

16.  Odstąpienie od umowy.
16.1. W przypadku opóźnienia rozpoczęcia robót powyżej 30 dni kalendarzowych Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca.
16.2. Odstąpienie od  Umowy przez Zamawiającego może nastąpić również, jeżeli Wykonawca:
16.3.1  zaniechał realizacji robót tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 30 dni,
16.3.2  bez uzasadnionego powodu nie przystąpił do robót lub w przypadku wstrzymania Robót przez   Zamawiającego, nie podjął ich wciągu 10 dni od chwili otrzymania decyzji o realizacji od Zamawiającego,
16.3.3  wykonuje roboty wadliwe i niezgodne z Umową i nie reaguje na polecenia Inspektora Nadzoru,  dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru terminie,
16.3.4  nie przedstawia wymaganych gwarancji, atestów, certyfikatów, deklaracji                     z właściwymi normami,  obliczeń, a ponadto dokumentów wymaganych przepisami prawa bądź postanowieniami Umowy,
16.3.5  powierzył wykonywanie robót podwykonawcy bez  przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy z podwykonawcą,
16.3.6  bez zgody Zamawiającego dokonał zmiany technologii bądź zastosował materiały budowlane inne niż określone w dokumentacji technicznej,
16.3.7 wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy zostało zajęte przez komornika lub inny organ egzekucyjny. 
§ 9.

17. Postanowienia końcowe.
17.1. Wszelkie zmiany Umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron w formie pisemnej do niniejszej Umowy, pod rygorem nieważności.

17.2. Nieważne są zmiany Umowy, jeżeli są niekorzystne dla Zamawiającego, a dla ich uwzględnienia niezbędna jest zmiana treści oferty przetargowej, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy i zawarcia Umowy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

17.3. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

17.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu  cywilnego i Prawa zamówień publicznych i Prawa budowlanego.

17.5. Żadna ze stron nie może przenieść na osoby trzecie praw, obowiązków i wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy, bez uprzedniej, pisemnej zgody drugiej strony, pod rygorem nieważności.

17.6. Umowę sporządzono w 4 egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiającego,  1 egzemplarz dla Wykonawcy.

     ZAMAWIAJĄCY:			                              WYKONAWCA: